현장설명 및 시방서

1. 공 사 명 : 경일대학교 14호관 화장실 환경개선공사

2. 공사위치 : 14호관1층,2층,3층[붙임 ‘공사위치도면’ 참조]

3. 공사범위

가. 철거 : 기존 급배수배관 및 벽체,바닥 철거

나. 설비 : 급배수 배관 교체

다. 방수

1) 기존 바닥하지면 정리

2) 1차 시멘트액체 방수

3) 2차 코너 액체방수

라. 타일

1) 벽체타일 : 600*300

2) 바닥타일 : 300*300 미끄럼방지 타일

마. 큐비클(화장실 칸막이) : 파스텔색상 (발주처 협의)

4. 공사기간 : 계약 후 29일 이내

5. 시공관리

가. 현장설명 시 지급된 시방서의 내용을 이행하여 시공하며, 누락된 부분은 건설공사 표준시방서에 따른다.

나. 사용재료는 모두 KS신품으로 사용함을 원칙으로 하고 수입품의 경우에는 JIS BS 기타 이에 준하는 규격품 이상을 사용한다.

다. ‘을’이 ‘갑’으로부터 지급받은 자재의 관리 및 운반은 ‘을’이 해야 하며 방법과 절차는 ‘갑’의 지시에 따라야 한다.

라. 현장 내에서 장기간 보관에 따른 손상이 발생하지 않도록 공정상 적절한 시점에 규격 및 사용부위별로 식별이 용이하게 하여 반입한다.

마. 발생되는 민원에 대해서 ‘을’이 전적으로 책임진다.

바. 기존시설물, 현장설치 및 시공 중 파손품은 ‘을’이 전량 교체시공하며 보양 및 관리를 포함한다.(오염 및 손상, 파손에 대한 부분에서는 원상복구 한다.)

사. 발생 폐기물은 매일 수거하여 장외반출을 원칙으로 하며, ‘갑’의 승인을 얻어 일정 장소에 적치 할 수 있다. 단, 적치한 폐기물은 ‘갑’의 요구에 따르며 ‘을’은 관리 책임을 진다. 폐기물은 시공자 책임으로 적법 처리하고 폐기물 증명서를 제출한다.

아. 공사용 자재 및 공사 중 시공분에 대한 보양 및 건물 내․외부 공사통로 및 공사로 인하여 훼손이나 오염의 우려가 있는 모든 장소의 보양작업을 포함하여 견적한다.

자. 공사 장소 및 공사통로 등 관련 장소에 공사로 인한 훼손, 오염의 우려가 있는 집기에 대한 ‘갑’의 이동/보양작업 요구 시 이를 충실히 이행하며 비용을 견적에 포함 한다.

차. 공사완료 시 공사를 위해 실시한 모든 보양지는 제거하며, 준공청소비용을 견적금액에 포함한다.

카. 공사는 본교 업무시간(09:00~17:00) 이내로 한다.(단, 토요일, 일요일, 공휴일 작업 및  업무시간 외 작업을 시행할 경우 사전 감독관의 허가를 득하여야 한다.)

타. 공사 도급업체는 계약 후 3일 이내 착공계를 제출하여야 하며, 공사 준공검사 예정 2일전 준공계 및 준공검사원을 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

파. 공사 도급업체는 발주처에 현장대리인을 선정하여 현장소장으로 임명하고 작업 중에는 항상 현장에 상주시켜 발주처의 지시 및 주의사항을 숙지하여 운용토록 하며, 공사기간 중 작업일보(작업인원 및 반입자재 내역, 작업내용 등을 기록) 및 공사 참여자 명단 등을 매일 오전 중에 감독관에게 제출한다.

하. 공사기간이 14일 이상일 경우 주간공정표를 작성, 매주 월요일 오전 중으로 감독관에게 제출하여야 한다.

거. 작업 중 고성방가, 음주 폭언 등 정서를 해치는 경우가 발생 시에는 본교 임의로 계약을 파기하고 공사금액 일체를 지불하지 않아도 이의 제기를 하지 않는다.

너. 악천후에 따라 작업일정에 지장을 초래하였을 경우 관계서류(기상 증명서 등)를 첨부하여 준공 예정일 3일 전 까지 공사기간 연장원을 제출하여야 한다.

더. 공사 도급업체는 공사에 따른 안전관리를 철저히 하여야 하며, 작업 기간 중 인명, 재산상의 피해 발생시는 피해 변상 등 모든 민·형사상의 책임을 져야 하고 공사의 공정에 하등의 영향을 미쳐서는 아니 된다.

러. 감독관이 제시하는 대로 재료, 마무리공법, 색상 등은 계약과 동시에 미리 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

머. 검사 또는 시험은 한국공업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방서의 해당 각항 및 감독관의 지시에 의하며, 검사 또는 시험에 필요한 모든 비용은 수급자 부담으로 한다.

버. 각 공사부분은 주요공정 혹은 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때에는 감독관의 확인을 받고 합격 승인을 얻은 후 다음 공정으로 진행한다.

서. 시공 후에는 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사부분은 반드시 감독관 입회하에 시공  한다.

어. 공사참여자의 관리는 근로 기준법,근로 안전 관리 규칙, 근로 관리 위생 규칙, 기타 근로관계 법규 등의 관련 규정에 어긋나지 않아야 한다.

저. 현장대리인은 작업기간 내 현장에 상주하여야 하며, 관계자와 협의하여 작업진행에 차질이 없도록 만전을 기해야 한다.

6. 안전관리

가. 산재보험은 ‘을’이 가입한다. 가입 후 3일 이내에 가입에 관한 제반서류를 ‘갑’에게 제출하여야 한다.

나. ‘을’은 견적제출 및 계약 시 안전관리비를 계산하여야 하고 안전관리비 사용내역서를 공사비 청구 시 ‘갑’에게 제출 하여야 한다.

다. 현장 내 음주는 불허하며 음주적발 시 음주자는 현장에서 철수시키고 ‘을’은 음주 후 사고에 대한 민․형사상의 책임을 진다.

라. 위험기계․기구 사용 시 안전장치를 반드시 부착 하여야 하며 안전장치 미부착 시 ‘을’은 안전장치 미부착 위해위험기구를 반출하여야 한다.

마. 기타 안전사고 예방을 위한 ‘갑’의 지시에 대하여 ‘을’은 이의를 제기하지 않는다.

7. 공사

가. 철거공사시 철거물로 인하여 보행자에게 피해가없도록 작업공간을 안전용품으로 공간 확보를 한다.

나. 기존 급배수 배관은 철거 후 신규로 시공 한다.

다. 방수공사는 배관 작업완료 후 배관주변1차 방수를 한다.

라. 2차 액체방수는 충분한 양생시간을 준다.

마. 타일공사는 벽체600*300/바닥300*300 각 으로 시공한다.

바. 도기류 설치는 발주처에서 모델을 선정받은 것으로 시공 한다.

사. 각 호관의 1층은 양변기/소변기 각 한곳에 장애인용 손잡이를 설치 한다.

아. 화장실칸막이는 발주처와 충분한 협의를 가진 후 시공며, 양변기공간의 간격은 폭 1100mm

깊이 1400mm로 한다.

자. 1층화장실의 출입문은 세이프 도어를 시공 한다.

차. 전기조명공사는 양변기 위 천정에 6“LED 매입등을 개별적으로 설치한다.

8. 장애인·노인·임산부 등의 이용이 용이하도록 시공한다.[붙임 ‘편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준’ 참조]

9. 준공계 제출 시 시공 전, 시공 중(각 공정별), 시공완료 사진을 각 부분별로 제출한다.

10. 상기사항 외 명기되지 아니한 사항은 사전 감독관과 협의하여야 하며, 협의하지 아니한 사항에 대한 문제점은 시공사가 책임진다.

11. 공사가 완성되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물을 제거하고 청소 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.  끝.