시방서_VCB

적용범위

본 시방서는 경일대학교 16호관 옥상층 전기 수․변전실, 교내전기실 VCB 차단기 교체 및 기존 설비 보완 보수와 기타 전기 공사에 적용한다.

본 시방서에 명시되지 않는 사항은 특별시방서에 준하며, 특별시방서에 명시되지 않은 사항은 일반관례에 따른다.

감 독 원

본 공사의 진행 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 경일대학교의 직원을 말한다.

감독원의 직위 및 성명은 경일대학교가 도급자에게 통지한다.

도급자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독원을 경유해야 한다.

현장대리인

도급자는 공사 착수와 동시에 건설산업 기본법 및 건설기술관리법에서 정한 기술자를 현장대리인으로 선임하여 작업현장에 상주시켜야 한다.

도급자는 현장대리인을 착공과 동시에 보안 및 안전에 관한 책임자로 임명한 관련서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

본 공사에 참여하는 인부는 도급자가 책임질 수 있는 신원이 확실한 자이어야 한다.

감독원은 현장대리인 및 도급자에게 고용된 일체의 종업원의 자격과 기능에 대한 심사 선정할 권한을 보유하며, 적합하지 않다고 판단될시 이들을 심사 및 교체 명령 할 수 있으며, 이때 도급자는 이에 따라야하고 이들에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

공사시공 및 공정계획서

도급자는 공사 시 하기 서류를 작성하며, 감독원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세운 예정공정표

작업계획서에 중요한 변경이 있을 경우 도급자는 감독원에게 변경계획서를 제출 하여 승인을 득하여야 한다.

도급자는 공사 진척이 예정공정 보다 지연되었을 경우에는 감독원의 지시에 따라 작업시간의 공정 만회에 필요한 조치를 취하여야 한다.

공사시행의 순서, 방법, 주요재료의 반입계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 계 획서 (장비, 인원, 자재 동원계획서 등)

안전관리계획서

현장대리인계( 협회인정-고급이상:자격증 사본 및 협회발행 경력확인원 첨부)

착공 전 현장 사진

착공(수)계

제보고

도급자는 항상 작업 진행 상황을 계획과 대조하여 주요공정이 현저히 지연될 때 는 즉시 그 이유 및 공정 지연을 회복할 수 있는 구체적인 대책을 수립하여 감독 원에게 보고 하여야 한다.

도급자는 작업 종료 시 까지 그 다음날의 작업예정을 감독원에게 보고하여야 한 다.

도급자는 작업시작 전 작업내용, 작업시간, 작업인원, 사용자재 종류 및 수량,사용 장비, 작업량 등을 기재한 작업일보를 감독원에게 제출하여야 한다.

공사 설계도서

도급자는 계약 전에 시방서 및 설계 도서에 관한 의문점을 명확히 해두어야 하며, 계약 후에 의문점이 생겼을 경우에도 감독원의 지시에 따라야 한다.

본 시방서 및 설계도서간에 상이하거나 그 내용 또는 수치에 불합리한 사항이 있 을 때는 관련법규 등에 의거 상호 협의하여야 한다.

본 시방서 및 설계 도서에 규정하지 않는 사항이라도 감독원이 시공상 필요하다 고 인정할 때는 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

설계 도서에 표시된 모든 치수는 완성된 것을 기준으로 한다.

자재관리

공사용 자재는설계도서 및 시방서에 명시된품질 및 치수의 것이어야 하며, 모 든 자재는 시험성적서나 이에 준하는 증빙서 등을 첨부하여 협회 및 경일대학교직원에게 제출, 승인을 받고 합격품에 한하여 사용한다.

도급자는 승인된 자재에 한하여 공사현장에 반입하되 반입시마다 감독원의 검사 를 받은 승인된 자재에 한하여 사용하며, 불합격품은 지체 없이 감독원의 지시에 따라 현장 외로 반출하여야 한다.

기 승인된 자재일 경우에도 변질, 변형, 오손, 기타 검사 당시와 다른 것은 일체 사용을 금한다.

규정대로 승인을 받지 못하거나, 보관상의 부주의로 인한 손실에 대하여는 일체 도급자가 부담으로 한다.

현장에 반입된 자재관리는 도급자가 책임진다.

사용자재는 K.S 혹은 승인된 신품이거나 동등 이상의 자재를 사용한다.

철거자재

공사시행에 따라서 생긴 철거자재 등은 감독원이 지정하는 장소에 손상 또는 망실되지 않도록 잘 보관하여야 한다.

중간검사

시공완료 후 검사가 불가능한 부분은 중간에 감독원에게 중간검사를 신청하여 서면또는 도면으로 확인검사를 받아두어야 하고, 추후 확인이 가능토록 검사과정 사진을제출하여야 한다.

공사 현장관리

도급자는 공사장 및 그 주위에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대해 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

기계기구

도급자는 공사에 사용할 모든 장비를 감독원이 승인한 공정표에 의거 작업량에 충분히 여유 있게 확보하여야 한다.

모든 공사용 장비는 현장 반출입시에 감독원의 승인을 받아야 한다.

안전관리

본 공사를 수행함에 있어 도급자는 안전관리에 만전을 기하여야 하고 산업안전보 건법, 당 공사 안전작업 규정, 기타 안전수칙을 준수하여야 하고 제반 사고에 대 하여는 도급자가 책임을 지고 도급자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 피해를 최소로 하기 위한 응급조치를 취하여야 한다.

공사에 필요한 안전조치는 당 공사의 규정 및 관계법규에 따라야 하며, 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하여야 하고 필요한 제반장비를 갖추어야 한다.

작업 전 모든 작업자 및 신입 작업자는 안전담당직원으로부터 안전교육을 득한 후 작업을 시행하며 공사장 내에서는 안전모, 안전화, 기타 보호 장구를 착용해 야 한다.

공사장에는 구급약을 상비하여 응급조치를 할 수 있도록 해야 한다.

도급자는 안전조치를 충분히 한 후 작업을 실시하여야 하며, 작업 중 과실 또는 고의로 인하여 발생하는 안전사고, 화재 등으로 인명 또는 재산상의 피해가 발생 하였을 때에는 도급자가 책임을 지고 도급자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

공사현장은 항상 기기 및 재료 등을 정리정돈하고 화재, 감전에 관련한 안전수칙 을 철저히 이행하여 안전사고 예방에 만전을 기한다.

정전작업이므로 임시등 설치 등 안전설비 및 장구를 갖추어야 한다.

사고의 보고

자재의 추락, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 미치는 사고나, 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 주는 사고가 발생 하였을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징후를 발견 할 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

제법규의 준수

공사 시행에 있어서 관계법규를 반드시 준수해야 한다.

노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 도급자의 책임 하에 이루어져야 하고 공사 현장에 투입된 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 도급자가 져야한다.

치 수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 실제와 다를 수 있으므로 착공 전 감독입회하에 확인하여야 한다.

공사시행

도급자는 미리 승인을 받은 예정공정에 따라 공사를 시행하여야 한다.

본 시방서에 규정이 없는 사항이라도 시공 상 필요하다고 인정되는 사소한 것은 감 독원의 지시에 따라 시행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 한다.

도급자는 작업 중 발생하는 일체의 시공변경에 대해 감독원의 사전승인을 받아야 하고 감독원의 승인 없이 시행된 변경 작업은 일체 인정하지 않으며, 기 시행된 부분에 대해서도 감독원의 시정 지시에 이의 없이 따라야 한다.

공사 시 주의사항

도급자 및 그 종업원은 경일대학교 내에서 다음의 안전사항을 준수하여야 한다.

기계 및 기구는 소정의 안전장치가 설치되어 있는 것을 사용 할 것.

안전표지 및 기타 안전시설은 감독원의 허가를 득한 후 활용하여야 하며, 허가 없이 이를 변경하지 말 것.

허가 없이 출입금지 구역 내에 출입하지 말 것.

감시인 또는 표시 없이 고소에서 물건을 투하하지 말 것.

흡연 장소 외에는 일체 담배를 피우지 말 것.

허가 없이 전열기와 화기를 사용하지 말 것.

허가된 장소에서의화기 사용은 반드시 감독원의 입회하에 실시하고, 사용한 후에는 철저히 진화조치 할 것.

위험물이 내포되어 있는 각종 쓰레기는 감독원의 지시에 의하여 처리할 것.

작업장 부근에 설치되어 있는소화전 위치를 숙지하고 부근을 정리 정돈하여 유사시 사용에 차질 없도록 할 것.

도급자는 본 학교에서 특고압 진공차단기 교체공사와 관련하여 제반사고 발생시모든 책임(민․형사)을 도급자가 지며 동공사와 관련하여 본교 시설물을 손괴시 원상복구 하여야 한다.

화재나 사고 발생 시는 진화 조치와 동시에 화재비상 전화로 감독 또는 학교 직원에 즉시 연락 할 것.

기타 안전 및 화재 예방에 관한 사항은 당 공사의 지시를 준수 할 것.

설계변경

설계변경은 다음 각 호 등에 따른다.

본 설계 도서에서 누락된 부분의 공종이 발생할 때

각종 운반거리가 변경 될 때

본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의해서 설계된 것인바, 조사 불능한 부분 및 조사이후 변동사항이 발생하였을 경우에는 실제에 맞추어 설계변경 할 수 있다.

본 공사에 관한 당사의 방침이 변경되었을 경우 도급자는 당사의 방침에 따라 설계변경에 응하여야 한다.

당 공사의 형편에 따라 구조물의 보수를 일부 변경, 시공 중지, 타절 준공 조치 할 수 있다.

준공검사

도급자는 공사가 완료 되었을 때 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 한다.

시방서에 명시된 대로 시공되지 않은 부분은 감독원 또는 검사원의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공 하여야 한다.

준공한 공사 목적물을 인수할 때 검사 또는 시험을 하기 위하여 해당 목적물의

일부를 철거할 필요가 있다고 판단되어 지시 하였을 경우에는 도급자 부담으로

이에 필요한 장비, 기구, 노동력, 및 재료를 제공하여야 하며, 검사 후 철거된

목적물을 재시공 하여야 한다.

준공 시 제출서류

준공검사원 : 1부

준공내역서 : 1부

작업사진 및 준공사진(CD 또는 File) : 1부

노임 직불 확인서 원본 1부

각종 보험료 납부 확인서 1부

안전관리비 사용내역서 1부

기타 우리 공사가 준공에 필요하다고 인정하는 서류

준공정산

본 공사의 모든 비용은 준공 후 정산처리 한다.

기록사진

도급자는 작업시행에 있어 공사진행 상황 및 준공상태를 나타내는 다음의 기록사진을 촬영하여야 한다.

공사 착수 전 현황

공사 시행의 일반현황

공사 작업 중 사진

완성 후에 검사 불가능 또는 곤란한 장소의 시공광경

감독원이 특별히 지시한 개소

공사 준공 현황 등

준공 시에는 상기 촬영사진을 정리하여 원판 포함 2부를 감독원에게 제출하여야 한다.

단, 보안을 요하는 개소의 사진촬영을 하고자 할 때는 감독원의 승인을 득하고 필히 필름을 감독원에게 제출하여야 한다. (복제 및 복사금지)

민원의 발생

본 공사 시행중 도급자의 귀책사유로 발생되는 일체의 민, 형사상의 민원은 도급자가 책임을 지고 변상처리 조치하여야 한다.

보안유지

도급자는 경일대학교내 보안업무 규정의 준수사항을 이행하여야 한다.

도급자는 우리 공사가 보안상 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 절대적으로 따라야 한다.

본 작업에 투입되는 공사인원에 대해서는 사전에 경일대학교에 명단을 제출하여야 한다.

용어해석

시방서의 해석상에 이의가 있거나 명기되지 않은 사항은 발주자 해석에 따른다.

시공도면 작성 및 설계도서 검토

도급자는 공사의 어느 부분이나 착공하기 전에 공사시행에 필요하다고 인정되는시공 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인 후 공사를 시행하여야 한다.

도급자는 당 공사가 작성한 설계 도서에 대하여 책임 있는 기술자가 이상 유무를 검토 확인하고 감독원의 승인을 득한 후 공사에 착수 하여야 하며, 설계도서의검토 확인의무를 다하지 못하여 발생되는 사항에 대하여도 도급자의 책임을 면할 수 없다.

뒷정리

시공 중 발생한 시설물의 변경, 훼손과 환경오염은 도급자 부담으로 원상 복구하 여야 한다.

도급자는 공사현장 내의 모든 공사가 완료되고 감독원에 확인이 끝난 후 준공이 끝난 것으로 간주되며, 이를 이행치 못 할 경우 모든 책임은 도급자 부담으로 하여야 한다.

공사기간

본 공사의 공사기간은 계약일로부터 ( 120일 ) 이내이며, 다음의 경우에 한하여 당공사의 승인을 얻어 공사기간을 조정할 수 있다.

천재지변 등 불가항력적인 사유에 의한 경우.

당 공사의 지시에 의하여 작업을 중단 하였을 때.

기타 도급자의 책임에 속하지 않는 사유인 경우.

기타사항

시공관련 주요공정에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

기타 공사 전반에 걸친 작업 방법은 일반관례에 준하고 주요 공정에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

작업상 필요하나 명기되어 있지 않은 경우 SHOP DRAWING을 도급자가 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 시공 되어야 한다.